Author: ФОМІЧЕВА Ірина Олександрівна
Last saved by: КРАСНОЖОН Євген Олегович
Company: МінПрироди

Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від                     2021 р. №
Київ
Про затвердження плану управління шахтними водами Кривбасу

1. Затвердити план управління шахтними водами Кривбасу, що додається.

2. Міністерствам, іншим заінтересованим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану, подавати щороку до 1 лютого Міністерству економіки інформацію про стан виконання плану для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України 					Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від  ___  ______________  р. № ____________
ПЛАН
управління шахтними водами Кривбасу
Кроки | Відповідальні за виконання | Строк | Джерела фінансування | Очікувані результати
I.	Заходи, спрямовані на забезпечення поточної діяльності з акумуляції та скиду надлишків шахтних вод у період розробки та реалізації проекту управління шахтними водами Кривбасу
1.	Розробка та запровадження «Альтернативної схеми (режиму) існуючій системі акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу та їх скиду у р.Інгулець» на період до 2026 року (далі - Альтернативна схема)

1.1.

Розробка Альтернативної схеми з розробленням режиму скиду надлишків зворотних вод та промивання русла річки Інгулець після їх скиду за рахунок подачі води з р. Дніпро

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»
 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПрАТ «Суха Балка» 
ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат»
 (далі – гірничорудні підприємства 
(за згодою))

30.09.2021

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

зменшення максимального обсягу акумуляції шахтних вод в ставку-накопичувачу до 6 млн м^3, зменшення фільтрації шахтних вод в підземні водоносні горизонти на 3-5 млн м^3 на рік. Досягнення показників вмісту хлоридів на момент закінчення промивки русла р. Інгулець на рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства: 500 мг/дм3 в разі використання води з р. Інгулець для зрошувальних робіт, 350 мг/дм3 в разі використання води з р. Інгулець для потреб господарського та питного водопостачання.

1.2.

Здійснення оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) Альтернативної схеми відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

10.12.2021

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

2.	Паспортизація об’єкта «Ставок-накопичувач «Балка Свистунова»

2.1.

Розробка та отримання паспорту ставка-накопичувача в балці Свистунова

ДП «Кривбасшахтозакриття»

15.04.2022

власні та залучені кошти
ДП “Кривбасшахтозакриття”

паспорт ставка-накопичувача в балці Свистунова, погоджений в установленому законодавством порядку Забезпечення сталої роботи гірничорудних підприємств на період розробки та реалізації проекту управління шахтними водами Кривбасу

3. Розробка та затвердження технічної документації на земельну ділянку ставка-накопичувача у балці Свистунова

3.1.

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки ставка-накопичувача балки Свистунова в натурі (на місцевості)

ДП «Кривбасшахтозакриття»

01.10.2021

власні та залучені кошти
ДП “Кривбасшахтозакриття”

визначення правового статусу використання земельної ділянки ставка-накопичувача у балці Свистунова

3.2. | Здійснення Державної реєстрації земельної ділянки ставка-накопичувача у балці Свистунова у Державному земельному кадастрі та державної реєстрації речових прав на земельну ділянку | ДП «Кривбасшахтозакриття» | 01.11.2021 | не потребує | визначення правового статусу використання земельної ділянки ставка-накопичувача у балці Свистунова
II.	Заходи з управління шахтними водами Кривбасу
1.	Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту управління шахтними водами Кривбасу (далі – ТЕО)

1.1.

Розробка та узгодження технічного завдання на розробку ТЕО

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)
ПАТ «Укрводпроект»
(за згодою)

30.10.2021

не потребує

визначення переліку завдань для реалізації плану управління шахтними водами Кривбасу, який передбачає розбавлення шахтних вод перед скиданням у р. Інгулець

1.2.

Розробка ТЕО будівництва І черги ставка-накопичувача 
у балці Свистунова

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)
ПАТ «Укрводпроект»
(за згодою)

31.10.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання технічних рішень щодо можливості безперебійної експлуатації гідротехнічної споруди в процесі виконання будівельно-монтажних робіт

1.3.

Комплексне обстеження ставка-накопичувача  у балці Свистунова та прилеглої території

ДП «Кривбасшахтозакриття»
гірничорудні підприємства
(за згодою)

31.09.2022

не потребує

виявлення напрямів фільтраційних процесів зі ставка-накопичувача балки Свистунова та стійкості гідротехнічної споруди

1.4.

Розробка ТЕО завершення будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу з урахуванням принципу розбавлення шахтних вод перед скиданням у р. Інгулець

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)
ПАТ «Укрводпроект»
(за згодою)

01.12.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання технічних рішень по завершенню будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу з розбавленням шахтних вод перед скиданням у                      р. Інгулець

1.5.

Аналіз водного балансу підприємств з підземного видобутку залізних руд з визначенням обсягів шахтних вод, які можуть бути використані в технологічних процесах

ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.02.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

визначення обсягу шахтних вод, які можуть бути додатково використані у технологічних процесах та обсягів шахтних вод, які потребують розбавлення перед скиданням їх у водні об’єкти

1.6.

Проведення аналізу хімічного складу шахтних вод по кожній шахті на окремих гірничих горизонтах

ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.12.2021

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання даних хімічного складу шахтних вод для встановлення можливості їх використання у технологічних процесах

1.7.

Проведення аналізу водопритоків кожної з шахт по окремих горизонтах

ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.12.2021

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання даних для прогнозування обсягу шахтних вод, які можуть бути додатково використані у технологічних процесах та обсягів шахтних вод, які потребують розбавлення перед скиданням їх у водні об’єкти

1.8.

Прогнозування водопритоків та хімічного складу шахтних вод з урахуванням їх розділення на придатні та непридатні до використання у технологічних процесах

ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.12.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

визначення обсягу шахтних вод, які можуть бути додатково використані у технологічних процесах та обсягів шахтних вод, які потребують розбавлення перед скиданням їх у водні об’єкти

1.9.

Розробка технічних рішень щодо можливості використання шахтних вод у технологічних процесах, у тому числі інших підприємств

гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.03.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання технічних рішень по вдосконаленню системи транспортування надлишків шахтних вод, зокрема, для використання їх у технологічних процесах

1.10.

Визначення обсягів та джерел води, необхідної для розбавлення шахтних вод перед скиданням їх у 
р. Інгулець

Держводагентство
ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)
проектні організації
(за згодою)

30.03.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання технічних рішень з подачі води для розбавлення шахтних вод перед скиданням їх в           р. Інгулець

1.11.

Визначення можливих варіантів по завершенню будівництва ставка-накопичувача балки Свистунова в умовах його експлуатації

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)
проектні організації 
(за згодою)

01.06.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання технічних рішень щодо можливості  безперебійної експлуатації гідротехнічної споруд в процесі виконання будівельно-монтажних робіт

1.12.

Визначення можливих варіантів будівництва споруд для розбавлення шахтних вод та скидання розбавлених шахтних вод в р. Інгулець

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства (за згодою)
проектні організації (за згодою)

31.09.2022

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання технічних рішень по завершенню будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу з розбавлення шахтних вод перед скиданням у             р. Інгулець

2. Проведення дослідницького моніторингу басейну р. Інгулець

2.1.

Проведення дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод басейну р. Інгулець у межах трьох окремих ділянок:
- від водозабору каналу «Дніпро-Інгулець» до початку Карачунівського водосховища;
- від створу Карачунівського водосховища до точки скиду шахтних вод зі ставка-накопичувача у балці Свистунова;
- від точки скиду шахтних вод зі ставка-накопичувача у балці Свистунова до контрольного створу в 
с. Андріївка

Міндовкілля
Держводагентство
ДСНС

31.12.2023

кошти державного бюджету

отримання інформації про екологічний стан басейну р. Інгулець із визначенням потенційних джерел забруднення басейну річки

3. Розробка проекту будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу відповідно до розробленого ТЕО проекту управління шахтними водами Кривбасу

3.1.

Розробка проекту І черги будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

30.07.2023

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання робочої документації з будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу, в умовах її експлуатації відповідно до отриманих технічних рішень в процесі розробки ТЕО

3.2.

Розробка проекту ІІ черги будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.03.2024

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

отримання робочої документації з будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу, відповідно до отриманих технічних рішень в процесі розробки ТЕО

3.3.

Здійснення оцінки впливу на довкілля проекту будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.07.2024

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

виконання статей 7, 8 та 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

4. Здійснення заходів з промивки русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець з метою забезпечення нормативної якості води в річці, у тому числі з урахуванням Нормативів екологічно безпечного зрошення та управління поливами, що встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 02.09.2020 № 766
4.1. | Розробка та затвердження режиму екологічного оздоровлення р. Інгулець з метою забезпечення якості води в р. Інгулець, у тому числі з урахуванням Нормативів екологічно безпечного зрошення та управління поливами, що встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 02.09.2020 № 766 | Держводагентство | до моменту отримання дозволу на спеціальне водокористування | не потребує | забезпечення нормативної якості води в р. Інгулець
6. Реалізація проекту управління шахтними водами Кривбасу

5.1.

Виконання будівельно-монтажних робіт І черги будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

01.08.2023 -01.03.2025

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

можливість експлуатації гідротехнічної споруди в процесі виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу

5.2.

Встановлення автоматизованих постів моніторингу якості води в р. Інгулець в контрольних створах, розташованих на відстані 500 м вище та 500 м нижче точки скиду надлишків шахтних вод зі ставка-накопичувача б. Свистунова в р. Інгулець

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

31.12.2024

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

Забезпечення постійного контролю за якістю води в р. Інгулець в зоні скиду надлишків шахтних вод зі ставка-накопичувача б. Свистунова

5.3.

Введення в експлуатацію І черги будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

31.03.2025

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

забезпечення дотримання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та забезпечення правового статусу гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу

5.4.

Виконання будівельно-монтажних робіт ІІ черги будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та зі спорудження інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

30.08.2026

власні та залучені кошти гірничорудних підприємств

виконання вимог статті 72 Водного кодексу України, доведення показників вмісту забруднюючих речовин у водах, що скидаються зі ставка накопичувача у ріку Інгулець, до фонових концентрацій забруднюючих речовин у водах р. Інгулець

5.5.

Введення в експлуатацію ІІ черги будівництва гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу

ДП «Кривбасшахтозакриття»
ГС «Екологічна рада Криворіжжя»
(за згодою)
гірничорудні підприємства
(за згодою)

31.12.2026

не потребує

забезпечення дотриман-ня Закону України «Про регулювання містобудів-ної діяльності» та забезпечення правового статусу гідротехнічної споруди з накопичення і скидання шахтних вод та інших об’єктів, пов’язаних з реалізацією проекту управління шахтними водами Кривбасу

_________________________________________________